제 안 요 청 서

(과업지시서 포함)

사 업 명	국산 NPU 기반 온디바이스 AI 노면 진단 스마트 시티 솔루션 인도네시아 실증 인프라 구축 및 관리 대행
주관기관	브레인웍스 주식회사

2026.  7.

문의	전화번호	이메일
	010-5521-0401	kdh0401@brainworks.co.kr

제안요청서 요약

○ 사업명 : 국산 NPU 기반 온디바이스 AI 노면 진단 스마트 시티 솔루션 인도네시아 실증 인프라 구축 및 관리 대행

○ 발주기관 : 브레인웍스 주식회사

○ 수행지역 : 인도네시아 자카르타 및 주변 권역

○ 용역기간 : 계약일 ~ 2026. 11. 30. / 현지 집중 실증운영 2개월

○ 사업예산 : 금 156,430,000원 이내(부가가치세 및 제반비용 포함 기준)

○ 계약방식 : 공개경쟁, 기술·가격 종합평가 후 협상

○ 접수기간 : 2026. 7. 20.(월) ~ 2026. 7. 24.(금) 18:00

○ 제출방법 : 이메일 접수(kdh0401@brainworks.co.kr, austin@brainworks.co.kr) / 방문·우편 접수 불가

○ 대금지급 : 선금 70%, 사업완료 및 검수 후 30%

○ 문의처 : kdh0401@brainworks.co.kr / 010-5521-0401

※ 본 제안요청서는 발주기관의 공개경쟁 절차를 위한 기준이며, 지원사업 협약·사업비 관리지침 및 발주기관 계약조건과 상충하는 경우 해당 기준을 우선 적용합니다.

목 차

Ⅰ. 사업 일반사항

Ⅱ. 과업 범위 및 요구사항

Ⅲ. 사업관리 및 계약조건

Ⅳ. 제안서 제출 및 작성방법

Ⅴ. 제안서 평가 및 협상

Ⅵ. 제출 서식

Ⅰ. 사업 일반사항

1. 사업 목적

○ 국산 AI반도체(NPU), GNSS-RTK, 영상기반 AI 기술을 융합한 온디바이스 노면 진단 솔루션의 인도네시아 현지 실증을 안정적으로 지원한다.

○ 실증 차량 확보·배차·운행·점검과 현지 일정 조율을 전문화하여, 발주기관 및 기술개발기관이 AI 성능검증, 위치정합 확인, NPU 실행환경 점검과 결과분석에 집중할 수 있는 운영기반을 확보한다.

○ 자카르타 및 주변 권역에서 반복 주행과 데이터 수집이 차질 없이 진행되도록 안전하고 일관된 현장 운영체계를 구축한다.

2. 추진 배경 및 필요성

○ 현지 실증은 교통환경, 도로 접근성, 차량·운전자 확보, 장비 장착, 반복 주행, 수요처 일정 연계 등 복합적인 현장 운영요소를 포함한다.

○ 차량 운영이 불안정할 경우 실증 일정 지연, 데이터 누락, 장비 설치 불안정, 운행 중 장애 등으로 전체 실증 품질이 저하될 수 있다.

○ 따라서 인도네시아 현지 운영 경험과 대응역량을 갖춘 수행사를 선정하여 차량운영 리스크를 별도 관리하고, 표준화된 운행기록과 현장 대응절차를 확보할 필요가 있다.

3. 사업 개요

○ 사업명 : 국산 NPU 기반 온디바이스 AI 노면 진단 스마트 시티 솔루션 인도네시아 실증 인프라 구축 및 관리 대행

○ 수행지역 : 인도네시아 자카르타 및 주변 권역(발주기관 지정 기준·보완코스)

○ 용역기간 : 2026. 8. 31. ~ 2026. 11. 30.(세부 일정 협의, 집중 실증운영 2개월)

○ 사업예산 : 금 156,430,000원 이내

○ 핵심범위 : 차량 확보·배차·운행, 현지 운전자 운영, 장비 장착 지원, 운행 전후 점검, 일정·동선 관리, 비상대응, 운영기록 및 결과보고

○ 성과목표 : 실증 일정 준수, 안정적 반복 주행, 데이터 수집환경 유지, 현장 대응 신속성, 재활용 가능한 표준 운영체계 확보

4. 입찰 및 추진 일정(예정)

○ 입찰공고·제안접수 : 2026. 7. 20. ~ 2026. 7. 24. 18:00

○ 제출서류 확인 : 2026. 7. 27.

○ 제안평가 : 2026. 7. 27 (서면평가 원칙, 필요 시 온라인 질의)

○ 우선협상대상자 통보 : 2026. 7. 28. 예정

○ 협상·계약 : 2026. 7월 중

○ 착수 및 현지운영 준비 : 계약 후 발주기관 협의

○ 현지 집중 실증운영 : 발주기관 지정 2개월

○ 최종보고·검수 : 2026. 11. 30. 이내

※ 상기 일정은 제안서 접수 결과 및 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 참가자에게 별도 통보합니다.

5. 참가자격

○ 대한민국 또는 인도네시아에서 적법하게 설립되어 본 과업을 수행할 수 있는 법인 또는 사업자

○ 인도네시아 현지에서 차량 확보·운전자 배치·도로 운행·일정 조율·긴급 대응이 가능한 조직 또는 공식 협력망을 보유한 자

○ 최근 5년 이내 해외 현지 실증운영, 테스트베드 운영, 차량·물류 운영, 스마트시티·ITS·ICT 실증지원 등 유사 수행경험을 보유하거나 동등 역량을 객관적으로 입증할 수 있는 자

○ 국세·지방세 체납, 부도·파산·영업정지 등 계약이행에 중대한 제한사유가 없는 자

○ 단독 또는 공동수급으로 참여할 수 있으며, 공동수급 시 대표사를 지정하고 참여사별 역할·지분·책임을 명확히 제시해야 한다.

○ 핵심 과업의 재위탁은 원칙적으로 금지하며, 불가피한 경우 발주기관의 사전 서면승인을 받아야 한다.

6. 계약 및 낙찰자 선정방식

○ 공개경쟁을 통해 기술제안서와 가격제안서를 종합평가하고, 협상적격자 중 고득점자 순으로 협상한다.

○ 기술평가 80점, 가격평가 20점으로 하며, 기술평가점수 68점 이상인 자를 협상적격자로 한다.

○ 본 절차는 사업의 전문성·현지 대응성·안전성을 고려하여 협상에 의한 계약 방식으로 운영하며, 관련 계약예규를 준용할 수 있다.

Ⅱ. 과업 범위 및 요구사항

1. 과업 수행 기본원칙

○ 안전 우선 : 차량·운전자·장비·인원의 안전을 최우선으로 하며 인도네시아 현지 법령과 교통규칙을 준수한다.

○ 실증 연속성 : 반복 주행과 데이터 수집이 중단되지 않도록 주 차량과 대체수단을 확보한다.

○ 장비 안정성 : 카메라, GNSS-RTK, NPU 및 저장·전원장치의 설치상태와 운용환경을 유지한다.

○ 기록성 : 모든 운행·점검·이슈·조치 내용을 객관적 증빙과 함께 기록한다.

○ 협업성 : 발주기관, 기술개발기관, 현지 수요처·협력기관과 일정을 긴밀히 조율한다.

○ 보안성 : 영상·위치·장비정보 및 사업 관련 자료를 무단 복제·반출·공개하지 않는다.

2. 세부 과업

ID	요구사항	세부 내용
REQ-01	착수 및 세부 수행계획 수립	계약 후 7일 이내에 수행조직, 차량·운전자 확보계획, 현지 운영일정, 코스 운영방안, 장비 장착지원, 안전·비상대응, 보고체계를 포함한 착수계획서를 제출한다.
REQ-02	실증 차량 확보	SUV·MPV·Van급 등 장비 장착과 적재·전원공급에 적합한 주 운행차량을 최소 1대 이상 확보하고, 동일 또는 유사 차급의 대체차량을 신속히 투입할 수 있는 방안을 제시한다. 차량은 합법 등록·검사·보험 상태여야 한다.
REQ-03	현지 운전자 운영	자카르타 및 주변 교통환경에 익숙하고 유효한 면허를 보유한 운전자를 배치한다. 운전자는 실증 목적·장비 탑재 유의사항·운행기록 작성·비상절차에 대한 사전교육을 받아야 한다.
REQ-04	배차·코스·일정 관리	발주기관이 지정하는 기준코스 및 보완코스에 대해 반복 주행이 가능하도록 일·주 단위 배차계획과 이동동선을 관리하며, 교통·기상·접근성 변화에 따른 대체코스를 제시한다.
REQ-05	장비 장착 및 운용환경 지원	차량 전면 카메라, GNSS-RTK 안테나, 국산 NPU 연산장치, 저장장치 및 전원변환장치의 설치·탈거·고정·케이블 정리를 지원하고, 기술개발기관의 설치기준을 준수한다.
REQ-06	운행 전·후 점검	매 운행 전후 차량 상태, 타이어·전원·연료, 장비 고정상태, 카메라 시야각, GNSS 안테나, 전원·통신 연결상태를 점검하고 체크리스트로 기록한다.
REQ-07	현지 조율 및 커뮤니케이션	현지 수요처·협력기관과의 일정연계, 도로 접근 협조, 운전자·차량 출입, 현장 연락을 지원한다. 한국어 또는 영어가 가능한 총괄담당자와 인도네시아어 현지담당자를 지정한다.
REQ-08	안전·보험·비상대응	차량·운전자 보험, 사고·고장·교통통제·기상악화·시위·도로폐쇄 등에 대한 대응절차와 비상연락망을 갖추고, 고장·사고 시 원칙적으로 24시간 이내 대체 운행방안을 마련한다.
REQ-09	운행기록 및 증빙관리	일일 운행일지에 날짜, 차량, 운전자, 코스, 출발·종료시각, 주행거리, 기상, 장비상태, 이슈와 조치결과를 기록하고, 지도·사진·관련 증빙을 첨부한다.
REQ-10	정기 보고 및 회의	주간 운영현황을 공유하고 월간보고서를 제출한다. 발주기관 요청 시 온라인 또는 현지 회의에 참석하며, 주요 이슈 발생 시 즉시 구두보고 후 24시간 이내 서면보고한다.
REQ-11	데이터·보안·개인정보 보호	도로영상, 위치정보, 장비정보, 수요처 정보 및 사업자료는 발주기관의 사전승인 없이 복제·이전·활용·공개할 수 없다. 현지 개인정보·영상정보 관련 법령을 준수한다.
REQ-12	최종보고 및 표준화	차량 확보·배차·운전자 운영·장비 탑재차량 관리·코스 운영·비상대응·이슈 사례를 체계화하여 향후 재활용 가능한 표준 현지운영 매뉴얼과 최종보고서를 제출한다.

3. 차량·운전자 및 현지운영 최소조건

항목	최소조건
주 운행차량	최소 1대 이상 상시 가용. 장비 장착·적재·전원연결에 적합한 SUV/MPV/Van급 우선
대체차량	주 차량 고장·사고·정비 시 24시간 이내 대체 가능한 확보방안
운전자	주 차량별 유효 면허를 보유한 현지 운전자 배치. 장비 탑재 운행 및 실증 절차 사전교육
보험·법규	차량·운전자 관련 현지 법정 보험·등록·검사·운행조건 충족
운영기간	발주기관 지정 2개월 동안 반복주행 지원. 세부 운행일수·시간·거리·차량수는 제안서에 명시
비용범위	차량임차·운전자·연료·통행료·주차·보험·정비·대체차량·현지 운영인력·통신·제세공과금 등 수행사 부담

4. 산출물 및 제출시기

ID	산출물	주요 내용	제출시기
D-01	착수계획서	수행조직, 일정, 차량·운전자, 코스, 장비지원, 안전·비상대응, 보고체계	계약 후 7일 이내
D-02	현지운영 세부계획	차량·운전자 명단, 보험·등록, 일·주 단위 배차, 기준·보완코스, 연락망	집중운영 14일 전
D-03	차량·장비 설치점검표	설치 전후 사진, 차량·장비 고정, 전원·통신·카메라·GNSS 점검	차량별 최초 운행 전
D-04	일일 운행일지	주행코스, 시각, 거리, 운전자, 차량·장비상태, 이슈·조치, 사진	운행 다음 영업일
D-05	주간 운영현황	계획 대비 실적, 누적운행, 이슈, 다음 주 계획	매주
D-06	월간보고서	월간 실적, 가동률, 이슈·위험, 개선·대응, 증빙목록	매월 종료 후 5일 이내
D-07	사고·장애 보고서	사실관계, 영향, 응급조치, 재발방지, 보험·기관 대응	발생 후 24시간 이내
D-08	최종보고서	전체 운영결과, 성과·한계, 이슈사례, 차량·코스·장비관리 결과	용역 종료 전
D-09	표준 현지운영 매뉴얼	배차·운전·점검·코스·안전·비상대응·보고 표준절차	최종보고 시
D-10	증빙자료 일체	원본 사진, 운행기록, 지도·트랙, 보험·계약·점검 증빙 및 목록	최종보고 시

5. 검수 및 성과기준

○ 차량·운전자 적합성 : 등록·보험·면허·차량상태·장비 장착 적합성 확인 완료

○ 운영 가용성 : 주 운행차량 가용률 95% 이상(불가항력 및 발주기관 요청에 의한 중단 제외)

○ 일정 이행 : 승인된 계획 대비 실증운행 이행률 90% 이상(합의된 일정변경 제외)

○ 기록 완결성 : 일일 운행일지 및 점검표 제출률 100%, 필수항목 누락 없음

○ 비상대응 : 사고·고장·일정변경 발생 시 즉시보고 및 24시간 이내 대체·복구계획 제시

○ 안전·보안 : 수행사 귀책 중대 안전사고 및 자료 무단반출·공개 0건

○ 최종 산출물 : 최종보고서·운영매뉴얼·증빙자료가 제안요청서 요구사항을 충족하고 발주기관 검수를 통과해야 함

※ 성과기준의 세부 산정방식과 예외사유는 착수보고 시 발주기관과 협의하여 확정

Ⅲ. 사업관리 및 계약조건

1. 수행조직 및 보고체계

○ 수행사는 총괄 PM, 인도네시아 현지 운영책임자, 차량·운전자 담당, 안전·비상대응 담당을 지정하고 역할과 연락망을 제출해야 한다.

○ 총괄 PM은 발주기관과 한국어 또는 영어로 원활히 소통할 수 있어야 하며, 현지 운영책임자는 인도네시아어로 기관·운전자·차량업체를 조율할 수 있어야 한다.

○ 핵심인력 변경은 동일 또는 그 이상의 역량을 가진 인력으로 대체하고 발주기관의 사전승인을 받아야 한다.

2. 사업비 및 대금지급

○ 총 사업예산 : 금 156,430,000원 이내(제반비용 포함 기준, 부가가치세 별도)

○ 선금 : 계약금액의 70%. 계약체결, 착수계획 승인 및 발주기관이 요구하는 선금보증 절차 완료 후 지급

○ 잔금 : 계약금액의 30%. 모든 과업 완료, 최종 산출물 제출 및 검수 완료 후 지급

○ 지급조건 : 세금계산서 또는 적법한 청구서류 제출, 계약상 의무 미이행·지체·하자 시 관련 금액 공제 또는 지급보류 가능

3. 제안가격에 포함되는 비용

○ 차량 임차·리스·조달, 운전자 인건비, 연료, 통행료, 주차료, 보험, 정비, 세차, 대체차량 및 차량 운영에 필요한 모든 비용

○ 수행사 현지인력의 급여·출장·체재·통신·교통·사무·조정·통역 등 과업수행에 필요한 비용

○ 인도네시아 현지 세금·수수료·은행비용, 장비 설치지원용 부자재, 보고서·증빙 작성 및 납품비용

○ 환율·물가·유류비·차량비 변동 위험은 수행사가 부담한다. 단, 발주기관의 서면 요구로 과업범위가 변경되는 경우에는 상호 협의한다.

○ 발주기관 및 기술개발기관 소속 인력의 국제항공료·숙박비 등은 본 용역비에 포함하지 않는다. 다만 수행사 인력의 비용은 포함한다.

4. 안전·법규·보험

○ 수행사는 인도네시아 현지 교통·노동·차량·보험·촬영·개인정보 관련 법령을 준수하고 필요한 일반 행정절차를 이행한다.

○ 운행 중 발생한 교통법규 위반, 차량사고, 인명·재산 피해 중 수행사 귀책부분은 수행사가 책임지고 보험 및 현지 절차에 따라 처리한다.

○ 도로 접근 제한, 치안·시위·재난·기상악화 등 위험이 있는 경우 발주기관에 즉시 보고하고 안전한 대체일정·코스를 제안한다.

5. 보안·데이터·지식재산권

○ 과업수행 과정에서 생성·수집된 운행기록, 사진, 위치·코스정보, 운영매뉴얼, 보고서 등 결과물의 소유권과 사용권은 대금지급 완료 후 발주기관에 귀속한다.

○ 수행사는 발주기관의 사전 서면승인 없이 사업명, 수요처, 장비, 영상·데이터, 성과를 홍보·제3자 제공·상업적 활용할 수 없다.

○ 개인정보 및 영상정보가 포함될 수 있는 자료는 접근권한을 최소화하고, 저장·전송 시 적절한 보안조치를 적용하며, 과업 종료 후 발주기관 지시에 따라 반환·삭제한다.

6. 변경관리·지체·불가항력

○ 수행사는 일정·차량·인력·코스·비용에 영향을 주는 사유를 인지한 즉시 발주기관에 보고하고 변경승인을 받아야 한다.

○ 수행사 귀책으로 일정이 지연되거나 산출물이 요구수준에 미달하는 경우 발주기관은 보완, 대체투입, 비용공제, 계약해지 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

○ 천재지변, 정부조치, 도로폐쇄, 치안·감염병 등 합리적으로 통제하기 어려운 사유는 증빙과 함께 보고하고 일정·코스·수행방식을 상호 협의하여 조정한다.

7. 하자보완 및 협조의무

○ 최종 검수 후 30일 이내 발견된 보고서·기록·증빙의 오류 또는 누락은 추가비용 없이 보완한다.

○ 감사·정산·성과검증을 위해 발주기관이 합리적으로 요구하는 계약·운영·증빙자료 제출에 협조한다.

Ⅳ. 제안서 제출 및 작성방법

1. 제출기간 및 방법

○ 접수기간 : 2026. 7. 20.(월) 09:00 ~ 2026. 7. 24.(금) 18:00

○ 제출처 : kdh0401@brainworks.co.kr, austin@brainworks.co.kr

(이메일 접수, 두 메일 수신 확인된 서류에 대해서만 접수 확인함)

○ 이메일 제목 : [입찰제안] 인도네시아 실증 인프라 구축 및 관리 대행_업체명

○ 제출방식 : 이메일 접수만 인정. 방문·현장 제출 및 우편 제출 불가

○ 유효기준 : 마감시각까지 발주기관 이메일 서버에 도착한 건. 제출 후 수신 여부 확인 권장

○ 문의 : kdh0401@brainworks.co.kr / 010-5521-0401

2. 제출 파일 구성

파일명	내용
01_기술제안서_업체명.pdf	제안서 본문. 서명·날인 포함
02_제출증빙_업체명.pdf	사업자·세무·재무·실적·인력·현지기반·서약서 등 증빙
03_가격제안서_업체명.pdf	가격제안서와 세부 산출내역. 기술제안서와 분리된 파일
03_가격산출내역_업체명.xlsx	항목·수량·단가·기간·환율·세금 등 산출근거

※ 대용량 파일은 분할 제출할 수 있으나, 모든 파일이 마감시각 내 도착해야 합니다. 가격제안서는 기술제안서와 분리하여 제출하며 발주기관은 기술평가 후 확인합니다.

3. 제안서 작성기준

○ 제안서 본문은 A4 세로, 표지·목차를 제외하고 30쪽 이내를 권장하며, 글자크기 10pt 이상, 페이지 번호를 부여한다.

○ 금액은 원화로 작성하고 현지 세금, 환율, 수수료, 제반비용을 포함한 총액으로 제안한다.

○ 차량 수, 차종, 운영기간, 예상 운행일수·시간·거리, 운전자 수, 대체차량, 현지인력, 단가와 산출근거를 명확히 제시한다.

○ 발주기관 요구사항과 다른 가정·제약·제외사항이 있는 경우 별도 표로 명확히 기재하며, 기재하지 않은 사항은 요구사항을 수용한 것으로 본다.

○ 제안내용은 객관적 증빙과 일치해야 하며, 허위·과장 또는 타사 권리침해 자료를 포함해서는 안 된다.

4. 제안서 권장 목차

구성	주요 내용
Ⅰ. 제안 개요	제안목적, 핵심전략, 차별점, 전제조건
Ⅱ. 회사 및 수행역량	회사현황, 재무·신용, 유사실적, 인도네시아 현지 기반, 파트너·네트워크
Ⅲ. 사업 이해 및 추진전략	사업·기술·현지환경 이해, 추진방향, 성공요인, 리스크 분석
Ⅳ. 세부 수행방안	차량·운전자, 배차·코스, 장비 장착·점검, 일정, 현지 조율, 비상대응, 기록·보고
Ⅴ. 수행조직 및 인력	PM, 현지책임자, 운전자·안전·차량 담당, 역할·투입률·경력
Ⅵ. 품질·안전·보안관리	검수·품질, 보험·안전, 개인정보·영상·위치데이터 보호, 변경·비상관리
Ⅶ. 일정 및 산출물	월·주 단위 일정, 산출물 제출계획, 성과기준 달성방안
Ⅷ. 가격 및 산출근거	총액, 차량·인력·운영·보험·세금·예비비 등 세부 산출
Ⅸ. 추가 제안	비용절감, 확장성, 현지 사업화 연계 등

5. 제출서류 목록

No.	서류명	비고	구분
1	입찰참가신청서	서식 1	필수
2	기술제안서	서식 자유 / 표지 서식 2	필수
3	가격제안서 및 세부 가격산출내역서	자체양식	필수
4	사업자등록증	사본	필수
5	법인등기사항증명서	최근 3개월 이내	법인 필수
6	국세·지방세 완납증명서	유효기간 내	필수
7	최근 2년간 결산 재무제표	최근 1개년 이상	필수
8	유사사업 수행실적 총괄표 및 증빙	서식 4 / 계약서·실적증명	해당 시
12	확약서	서식 6	필수
13	보안·개인정보·청렴 이행서약서	서식 7	필수

6. 제안서 효력 및 유의사항

○ 제안서는 제출일로부터 90일간 유효하며, 협상·계약 시 제안내용은 계약문서의 일부가 될 수 있다.

○ 발주기관은 평가를 위해 추가 설명·보완자료를 요청할 수 있으나, 경쟁질서를 해치는 본질적 제안변경은 허용하지 않는다.

○ 제안서 작성·제출·발표·협상에 소요되는 비용은 입찰참가자가 부담한다.

○ 허위서류, 중대한 누락, 타인의 실적·인력 무단사용, 담합 또는 부정행위가 확인되면 평가대상 제외, 선정취소 또는 계약해지할 수 있다.

○ 발주기관은 유효제안 부족, 예산·사업계획 변경, 적격자 부재 등의 사유로 재공고·유찰·중단할 수 있다.

Ⅴ. 제안서 평가 및 협상

1. 평가절차

○ 1단계 : 제출서류 및 참가자격 확인

○ 2단계 : 정량평가(실적·현지기반·인력·경영상태)

○ 3단계 : 정성평가(사업이해·수행방안·안전·현지대응·관리)

○ 4단계 : 가격평가

○ 5단계 : 기술·가격 합산 및 협상순위 결정

○ 6단계 : 우선협상대상자 협상 후 계약체결

※ 서면평가를 원칙으로 하되, 발주기관은 필요 시 온라인 발표 또는 질의응답을 요청할 수 있습니다.

2. 평가배점

평가부문	배점	내용
정량평가	20	유사실적, 인도네시아 현지기반, 투입인력, 경영상태
정성평가	60	사업이해, 차량·운전자·코스·장비·안전·현지조율·관리·보고
가격평가	20	총 제안가격
합계	100

3. 세부 평가표

부문	평가항목	평가내용	배점
정량	유사사업 수행실적	최근 5년 해외 실증·테스트베드·차량운영·스마트시티/ITS 운영 실적	8
정량	인도네시아 현지 수행기반	현지 법인·지사·상주인력 또는 공식 파트너망과 실제 동원 가능성	6
정량	투입조직 및 핵심인력	PM·현지운영·차량·안전 담당의 경력, 역할, 투입가능성	4
정량	경영상태·계약이행 안정성	세금체납·재무·신용 및 계약이행 위험	2
정성	사업 이해도 및 추진전략	사업목적·기술·현지환경·성공요인 이해, 전략의 타당성	10
정성	차량·운전자 확보방안	차종·수량·상시가용성·운전자·보험·대체차량의 구체성과 실현성	12
정성	코스·배차·장비 운영방안	반복주행, 일정·동선, 장비 장착·점검·전원·통신 지원의 적절성	12
정성	안전·비상·리스크 대응	사고·고장·기상·교통통제·도로접근·치안 대응 및 복구계획	10
정성	현지 조율 및 커뮤니케이션	수요처·기관 협의, 한국어/영어·인도네시아어 소통, 현장 대응성	6
정성	사업관리·품질·보고·보안	조직·일정·기록·증빙·성과관리·데이터보안·개인정보 보호	6
정성	추가 제안 및 확장성	비용·운영 효율, 표준화, 후속 실증·사업화 기여	4
가격	제안가격	예산 내 총액 및 가격평가 공식 적용	20

4. 정량평가 기준

항목	평가기준
유사사업 수행실적(8)	5건 이상 8점 / 3~4건 6점 / 1~2건 4점 / 없음 0점
인도네시아 현지 수행기반(6)	현지 법인·지사와 상주인력 6점 / 공식 파트너와 전담인력 5점 / 구체적 확보계획 3점 / 증빙 미흡 0~2점
투입조직 및 핵심인력(4)	PM·현지운영·차량·안전 담당이 모두 충족되고 유사경력 충분 4점 / 일부 충족 2~3점 / 미흡 0~1점
경영상태(2)	체납·부도 등 제한사유 없고 자료 충실 2점 / 자료 일부 미흡 1점 / 중대한 위험 또는 미제출 0점

5. 가격평가

가격평가점수 = (유효 제안 중 최저제안가격 ÷ 해당 제안가격) × 20

○ 제안가격이 사업예산을 초과하는 경우 평가대상에서 제외한다.

○ 산정결과는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 적용한다.

○ 현저히 낮은 가격으로 정상 이행이 우려되는 경우 발주기관은 산출근거와 이행확약을 요구할 수 있으며, 소명이 불충분하면 협상대상에서 제외할 수 있다

6. 협상적격자 및 협상순위

○ 기술평가 68점 이상인 자를 협상적격자로 하고 기술·가격 합산점수가 높은 순으로 협상순위를 정한다.

○ 합산점수가 동일한 경우 기술평가점수가 높은 자, 세부 수행방안 점수가 높은 자, 가격이 낮은 자 순으로 우선한다.

○ 우선협상대상자와 과업범위, 일정, 인력, 산출물, 가격 및 계약조건을 협상하며, 협상 결렬 시 차순위자와 순차 협상한다.

○ 유효제안이 1개사인 경우 발주기관은 적격성 평가 후 협상을 진행하거나 재공고할 수 있다.

○ 최종 계약금액은 사업예산 이내에서 제안가격 및 협상결과에 따라 확정한다.

Ⅵ. 제출 서식

[서식 1] 입찰참가신청서

입찰참가신청서 ※ 아래 사항 중 해당란만 적으시기 바랍니다.							처리기간
							즉시
신청인		상호 또는 법인명			법인등록번호
		주소			전화번호
		대표자			주민등록번호
입찰 개요		입찰공고 (지명)번호		제 호	입찰일	. . .
		입찰건명
입찰보증금		납부		ㆍ보증금률: ％ ㆍ보증금: 금 원정(￦ ) ㆍ보증금 납부방법:
		납부 면제 및 지급 확약		ㆍ사유: ㆍ본인은 낙찰 후 계약을 체결하지 아니한 때에는 귀 자치단체에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인			본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: 주민등록번호:
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 기관의 일반(제한ㆍ지명) 입찰에 참가하고자 공사(물품구매ㆍ기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 구비서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 귀하
구비서류	1. 입찰 참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 위임장 1부(위임한 경우만 해당한다) 3. 그 밖에 공고에서 제출하도록 한 서류							수수료
								없 음
세입세출 외 현금출납원 성명: (인)
210㎜ × 297㎜(신문용지 54ｇ/㎡(재활용품))

[서식 2] 기술제안서 표지

「 국산 NPU 기반 온디바이스 AI 노면 진단 스마트 시티 솔루션 인도네시아 실증 인프라 구축 및 관리 대행 」용역

기 술 제 안 서

2026.  07.

[서식 3] 유사사업 수행실적 총괄표

유사분야 사업 수행실적(최근 3년)

(금액단위 : 백만원, VAT포함)

순번	사 업 명	사업기간	사업개요	계약금액 (백만원)	발주처	수행분야	실적증명첨부여부

주)

1. 해당 입찰자의 공고일 기준 최근 3년간 데이터 또는 빅데이터 분석 사업 실적을 기재

2. 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며, 비고란에 원도급 회사를 기재

3. 공동수급 계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

4. 사업기간에는 해당사업 전체기간과 해당회사의 참여기간을 구분하여 기재

5. 건별로 실적증명원(원본대조필) 등 입증서류를 제출, 실적증명 첨부 여부란에 페이지표시

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서, 세금계산서 등의 증거서류를 제안서 제출 시 첨부 제출하고, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

[서식 4] 투입인력 현황

과업수행 투입인력 계획

1. 투입인력 자격 및 경력 요약현황

분야별	기술 등급	성명	연령 (만)	본과업 참여직위	최종학력 (학위)	자 격 증		입사일	주 요 경 력
						종목	취득일
총괄 책임자
분야별 책임연구원
분야별 책임연구원
분야별 책임연구원
분야별 연구원
분야별 연구원
분야별 연구원

주)

1. 경력은 입찰공고일까지 기재

[서식 5] 확약서

확   약   서

업 체 명

주    소

1. 당사는 입찰공고서와 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하였으며 이를 준수하겠습니다.

2. 제출한 제안서 및 증빙자료는 사실이며, 허위·위조·과장으로 확인될 경우 평가제외·선정취소·계약해지 등 모든 불이익을 감수하겠습니다.

3. 우선협상대상자로 선정될 경우 성실히 협상에 임하고, 계약체결 후 제안내용과 협상결과를 충실히 이행하겠습니다.

4. 본 입찰과 관련하여 담합, 부정청탁, 금품·향응 제공 등 공정성을 해치는 행위를 하지 않겠습니다.

5. 과업수행 중 취득한 사업·기술·수요처·영상·위치·개인정보를 보호하고 발주기관 승인 없이 제3자에게 제공하거나 활용하지 않겠습니다.

6. 인도네시아 현지 법령과 안전수칙을 준수하고 차량·운전자·보험·비상대응에 관한 책임을 성실히 이행하겠습니다.

2026년      월      일

업체(기관)명	:
대표자	:	(인)
주민번호	:

브레인웍스 주식회사 대표 귀하

[서식 6] 보안·개인정보·청렴 이행서약서

청 렴 계 약 이 행 서 약 서

당사는 본 용역과 관련하여 취득하는 모든 비공개 정보, 영상·위치정보, 개인정보, 장비 및 기술정보를 업무 목적에 한하여 최소한으로 처리하고, 접근통제·안전한 저장·전송·반환·삭제 등 필요한 보호조치를 이행하겠습니다. 또한 발주기관 임직원 및 이해관계자에게 금품·향응·편의·부당한 이익을 제공하지 않으며, 공정한 경쟁과 청렴한 계약이행을 준수하겠습니다. 위반 시 관계 법령과 계약조건에 따른 책임을 부담하겠습니다..

서     약     내     용

1. 위의 사업과 관련하여 계약으로부터 준공(납품)에 이르기까지 제반 계약사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량 자재의 사용 및 납품 등 계약사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

2. 위 사업의 계약 체결과 이행 그리고 공사 시행과 준공(납품)등의 전 과정을 통하여 어떠한 경우에도 뇌물공여나 청탁으로 관계공무원을 회유하여 편의를 제공받는 등 불법을 묵인 하도록 요청하지 않겠으며, 관계공무원의 어떠한 불법, 부당 요구에도 단호히 이를 거부 하겠습니다.

3. 위의 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 밝혀질 경우 관련법령에 따라 처분은 물론 귀 기관이 발주하는 모든 공사(용역, 물품 등)에 대하여 참가 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 스스로 참가하지 않겠으며, 이와 관련 귀 기관의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

2026년      월      일

서약자     대표                 (인)

브레인웍스 주식회사 귀중